본 문서의 2차 저작권은 와우폼에 있습니다.

건축시공 체크리스트

시 설 설 계 처

구 분	확 인 내 용	비 고
부지현황조사 가설공사	- 대지경계 ․인접소유자 및 도로관계자 확인 ․경계말뚝설치 ․벤치마크를 견고하게 설치 - 시공장애물의 위치, 형상 등을 조사하여 철거 우회, 이설, 방호, 보양등의 방법강구 ․지 상 : 기존건물, 수목, 매설물 ․지 중 : 가스관, 수도관, 하수관, 케이블 ․가공선 : 전력케이블, 통신케이블 - 도로상황 ․출입구의 형태, 폭 및 위치결정 ․기자재 및 잔토처리 경로 - 근린상황을 조사하여 피해발생을 방지하고 민원에 대처 ․근린건물 및 공작물 ․주변 주민의 상황 ․지역의 풍속, 풍토, 생활습관 등 - 기상조건 - 법규제(지자체 조례등) 및 행정지도사항 파악 - 현장사무실은 현장관리의 용이성, 토목공사로 인한 이동에 대비하여 적정위치선정 - 시험실은 관련규정 및 품질관리계획에 적합하게 설치 - 자재적치장은 현장내 이동통로 및 운반용이성 강우등의 영향고려 - 가설울타리의 기둥간격(2M) 높이(1.8M)는 적정하게 설치하고 버팀기둥 설치 - 외부비계 ․지주간격 : 1.3～2.1M ․띠 장 : 1.8M 이내 ․지주받침 BASE PLATE설치 - 비계다리는 폭 90CM이상으로 하고 미끄럼막이 설치 - 낙하물방지망 ․20M이하 : 1단 이상 ․20M이상 : 2단 이상 - 공사용 전력 및 용수확보

【공사전 준비사항】

구 분	확 인 내 용	비 고
사전확인 및 검토사항 흙막이공사중 점검사항	- 굴착범위 확인 : 돌출물 및 피트등 - 지하부분의 구조확인 : 흙막이 버팀대와 말뚝위치와의 중복여부 - 지하외벽과 대지경계와의 거리확인 - 흙막이벽과 구체와의 관계검토 : 거푸집 및 방수작업 고려(600-800mm정도) - 흙막이벽과 인접구조물과의 관계 - 띠장․버팀대․지주와 구체와의 관계검토 : 띠장등이 구체(슬리브, 보, 기둥 등)와의 겹침여부 검토 - 흙막이벽의 밑둥깊이 검토 : 흙막이벽 압출 및 어스앵커의 힘에 대응하는 정도 - 측압의 검토 - 히빙의 검토 : 연약지반시 주의 - 보일링의 검토 : 지하수위 저하공법 등 - 지하수에의한 트러블 검토 - 배수에 대한검토 - 계측계획 수립 : 흙막이, 주변지반 및 근린건물 - 사면의 안정성 검토 : 안전한 물매형성 - 사면의 보양방법 검토 : 기상상태, 존치기간 - 측압의 밸런스 검토 : 주변지반의 고저차가 큰 경우 - 아일런드부분의 충분한 확보 : 최소 2스팬 - 남기는 흙의 굴착 및 반출방법 검토 - 버팀대의 물매적정여부 : 35°이하 - 구체시공 접합부의 보강방법 검토 - 앵커층의 토질확인 : 지층유무 및 깊이 - 앵커체가 대지밖으로 나오는 경우의 조치계획 : 토지소유자 양해 및 제거식 앵커검토 - 보 및 슬라브 거푸집의 지지방법 - 슬라브의 개구부의 크기 배치계획 : 자재 및 잔토 반출 및 차량동선 고려 - 1층바닥의 강도검토 : 자재 및 차량이동 계획에 따라 보강 - 콘크리트 이어붓기부의 충진방법 검토 - 양생기간검토 : 하층의 작업은 양생 완료후 - 관계 관공청에 대한 신고확인	공통사항 오픈컷공법 수평버팀대 아일런드공법 어스앵커공법 연속벽공법 (역타공법) 공통사항

【토공사1】

【토공사2】

구 분	확 인 내 용	비 고
흙막이공사중 점검사항 터파기공사관련 점검사항 말뚝지정공사	- 흙막이벽의 위치, 다림보기의 검사실시 : 규준대 및 트랜싯 - 접합부 볼트의 조임여부 - 용접부의 검사실시 - 흙막이벽과 띠장사이의 공극 충진여부 : 몰탈, 콘크리트, 강제패킹 - 사면은 소정의 물매가 지켜지는지 확인 - 비탈머리에 자재등의 적치여부 확인 - 비탈면끝의 지하수 유출여부 확인 : 흙포대 쌓고 지하수 별도유도 - 프리스트레싱을 걸었는가 : 부재간 접점의 공극 충진 - 잭 부분의 보강은 했는가 - 주변부의 흙이 충분히 남아있나 - 버팀대의 기초부 점검 : 엔드플레이트 설치 - 띠장, 버팀대 교차부의 들뜸은 억제 되어 있는가 : 역브래킷 설치 - 띠장받이 브래킷의 용접부점검 : 앵커 긴장전 - 앵커의 인장시험실시 - 앵커는 적정한 긴장을 시켰는가 - 개구부의 난간설치 및 상하 연락방법 강구 - 잔토반출차량의 동선 및 대기장소 검토 - 사토장 예비조사 - 타이어 세정장치 설치 - 차량입퇴장시 교통정리 여부 - 예정선에 적정하게 굴착여부 - 기계굴착으로 인한 지지층의 손상여부 - 되메우기는 충분히 다졌는가 : 시트파일이나 버팀기둥 자리 주의 - 말뚝의 임시적치는 받침목위에 하고있나 - 시험말뚝박기를 실시하였나 : 시공서 및 지층파악 - 이음검사는 실시하였는가 : 상하부축선 및 용접부 - 다림보기검사로 말뚝의 수직도를 확인하고 있나 - 안정액관리는 실시하고 있는가 - 슬라임은 제거하였나 : 철근삽입, 콘크리트 타설전 - 케이싱 파이프의 수직도를 유지하고 있나 - 트레미관은 콘크리트에 묻혀 시공되고 있나	공통사항 오픈컷공법 수평버팀대 아일런드공법 어스앵커공법 연속벽공법 (역타공법) 공통사항 현장타설

□□□ㄴ

【철근공사】

구 분	확 인 내 용	비 고
재료보관 가 공 배 근	- SIZE별, 종류별, 길이별로 구분하여 받침목 위에 보관하고 덮개로 보양하고 있나 - 철근에 녹, 흙, 기름 등의 이물질이 없도록 보관 - 철근의 가공은 25MM이하는 상온가공 28MM이상은 가열가공 - HIGH TENSION BAR의 절단시 산소로 절단금지 - 철근의 BENDING처리는 양호한가 - 배근시 주근,부근의 갯수, 지름등은 확인되었는가 - 정착길이 및 이음길이는 확인되었는가 : 인장 40d, 압축 25d - 배근간격은 정확하며 수직,수평상태는 양호한가 - 개구부 및 매설물 주위에 보강철근은 배치하였는가 - 기둥주근의 이음은 층고의 2/3이하에 두었는가 - 나선기둥의 나선철근 간격은 3cm이상 8cm이하로 하였는가 - HOOP 및 STIRRUP의 지름 및 간격은 적절한가 - SPACER의 간격 및 크기는 적절한가 : 피복두께 유지 - 보 상하부의 이음 위치는 절절한가 : 상부근은 보의 중앙, 하부근은 단부부터 L/4이내 - 슬라브의 주근 배력근의 위치는적절한가 - 슬라브내 매설물로 인한 철근의 흐트러짐은 없는가 - 슬라브의 피복두께에 유의하고 매설물로 인해 콘크리트의 채움에 지장이 없도록 유의 - 철근의 배근전 거푸집검사를 먼저 실시하고 조립후 청소는 실시 하였는가

구 분	확 인 내 용	비 고
설치준비 거푸집설치 지주설치 거푸집 및 지주 존치	- 벽, 기둥 등의 중심먹줄과 기준먹줄의 검사를 하였는가(설비 및 마감공사 고려) - 기둥, 벽의 개구부, 계단위치 및 바탕먹줄 검사를 하였나 - 거푸집 설치전 적합한 박리제를 도포 하였는가 - 설치된 형틀의 치수는 정확한가 - FORM TIE 및 COLUM BAND는 콘크리트 측압에 견딜수 있도록 적절하게 배치되었나 - 거푸집의 틈새는 밀실하게 보강되었는가 - 옹벽 및 기둥의 수직도는 양호한가 - 보의 스팬이 클때에는 중앙부를 약 1/200～1/500정도 올려 시공하였나 - 개구부의 보강상태는 양호한가 - 콘크리트 타설높이에 대해 적절한 표시를 하였는가 - 전기 및 설비관계의 슬리브 개수, 위치 및 설치는 양호한가 - 매입철물류의 위치는 적정한가 - 벽체 및 기둥하부에 청소구를 만들어 콘크리트 타설전 이물질을 제거하였나 - 동바리의 간격 및 설치상태는 양호한가 - 층고가 높을때의 지주보강은 잘 되어있나 - 지주를 지반에 세울때 지주가 침하되지 않도록 조치하였는가 - 지주의 교환계획을 신중하게 고려하고, 지주 교환시 순서주의 - 거푸집 존치기간의 준수 - 거푸집의 해체시에는 구조물에 손상이 없도록 해체하고 높은곳에서의 낙하금지

【거푸집공사】

구 분	확 인 내 용	비 고
준비사항 콘크리트 타설 콘크리트 보양	- 레미콘공장은 KS표시공장인가, 현장과의 거리는 적정한가 - 배합보고서에 따른 시험성적표, 골재의 입도시험표 등은 검사하였는가 - 혼합에서 현장타설까지의 장비계획,배차간격 및 운반시간에 관한 검토를 하였나 : 25C미만 120분이내, 25C이상은 90분이내 - 타설시 기온변화 및 외기조건(서중기, 한중기)에 따른 대책은 수립하였나 - 설치된 형틀 및 배근의 청소상태는 양호한가 - 타설인원 및 진동기의 배치는 적절한가 : 수직으로 60CM간격 - 현장의 콘크리트 시험은 적정하게 수행하고 있는가(슬럼프, 공기량, 압축강도, 염하물) - 타설시의 온도는 적정하며(4℃이상 35℃이하) 타설높이는 적정한가(재료분리주의) - 이어붓기는 응력을 고려하여 적정한 위치선정 (보, 슬라브 : 스팬중앙, 기둥 및 벽 : 슬라브 및 기초 윗면) - 캔틸레버는 이어붓기를 하는곳이 없는가 - 타설후 곰보, 재료분리는 없으며 표면상태는 양호한가 - 배부름 및 COLD JOINT현상은 없는가 - 타설후 최초 5일간 2℃이상 보존하며 양생 (마대, 비닐, 습윤양생)은 적절한가 - 타설후 24시간은 보행하거나 5일간은 무거운 물건의 적재금지 - 타설후 콘크리트 잔재 및 공재등은 청소하여 정리정돈 하였는가

【콘크리트 공사】

【철골공사】

구 분	확 인 내 용	비 고
일반사항 공장제작 현장조립 고력볼트 현장용접	- 철골가공 공장선정의 적정성 : 생산능력 및 납기 준수여부 등 - 일반도 및 구조도 설비도와의 대조확인 - 사용강재의 종별을 확인하였나 : 강재규격증명서 시험성적서등 - 볼트 너트 고력볼트의 종류 및 재질 : 규격증명서 - 공작도의 승인 - 철골제작용 기준줄자와 공사현장용 기준줄자의 대조(테이프 맞춤) - 공작도와 현치도의 확인 : 기둥중심 간격, 층높이 보의 위치 및 스팬크기, 설비의 관통구멍 - 용접봉의 확인 : 피복재박탈, 오손, 변질, 흡습 - 절단면의 체크 : 노치, 홈 및 변형의 교정 - 접합부 마찰면의 밀착상태 - 수취검사(초음파 탐상검사등) : 제3자 검사 - 운반중의 보양 : 현장조립순서에 따르고 운반중 좌굴등이 발생하지 않도록 조치 - 베이스플레이트의 모르타르 보양 및 레벨조정 - 부재의 중량(기둥, 보), 부재수량, 부재형상 확인 : 조립장비 선정 및 공정체크 - 가설재의 준비상황 확인 : 와이어로프(훅걸기 및 변형바로잡기), 턴버클, 다림추, 피아노선 등 - 현장조립시의 제반 주의사항 확인 : 작업분담 및 신호방법, 작업순서 등 - 조립중의 외력에 대한 강구 : 강풍, 강설, 충돌 등 - 고력볼트시 마찰면 체크 : 밀스케일, 건조상태 - 고력볼트의 체결력 확인 : 토크값 및 너트회전량 - 용접공의 자격은 적정한가 - 이음그루브의 형상, 루트간격의 적정성 확인 - 용접길이, 덧붙임등은 적정한가 - 용접시의 날씨나 기온은 적정한가 - 용접검사의 철저 : 초음파 탐상법 등

구 분	확 인 내 용	비 고
조적공사 미장공사	- KS표준규격인가(형태, 강도, 흡수율) - 기둥, 보등 타재료와의 접합부에 균열 방지대책 수립 - 조적전 먹매김상태, 불순물제거 물축임등의 사항은 확인되었는가 - 방수층위 조적시 방수층을 손상시키지 않는가 - 줄눈크기의 적정성(보통: 10m/m, 내화: 6m/m)과 수평도 확인 - 슬라브 및 보 하부 충진물탈은 밀실한가 - 인방은 좌우 20cm이상 물렸는가 - 사춤몰탈의 배합비(쌓기용1:3, 줄눈용1:1)와 반죽후 1시간내에 사용하는가 - 철문틀의 고정철물을 매입하였는가 (상하끝 및 중간 60cm이내) - 목문틀의 고정용 나무벽돌을 박았는가 - 일일쌓기 높이는 1.2m 이하인가 - 배전반 및 각종배관에 따른 적절한 보강조치는 취하였나 - 보강철근의 치수 간격 및 피복두께(블럭내 2CM)는 적정한가 - 살이 두꺼운쪽을 위로 시공하였나 - 보강블럭 시공시 사춤콘크리트의 채움여부 - 블럭메쉬는 3단마다 배치하고 한눈이상 겹쳤는가 - 기둥에 접속되는 블럭은 3단마다 연결철물을 배치하였나 - 1일작업종료시 블럭내 몰탈은 상단으로부터 5CM이상 내려서 시공되었나 - 재료보관은 적정한가:시멘트,플라스터 습기주의 - 콘크리트의 바탕평활면의 조치 - 큰크리트 이어붓기면의 조치(방수조치등) - 강제 철망류의 점검 조치(와이어라스 등) - 이종바탕 접속부의 균열 박리에 대한 대책강구 - 바탕의 청소 및 물씻기는 충분히 했나 - 바름두께 및 바름회수(초벌,재벌,정벌)는 지키고 있는가 - 미장면은 급격한 건조(통풍금지)를 막고 한냉시는 작업중지나 가열대책 수립	공통사항 블럭공사

【조적공사,미장공사】

【석공사,타일공사】

구 분	확 인 내 용	비 고
석공사 타일공사	- 공장선정은 적정한가(생산능력, 품질관리상태) - 제품의 압축강도 흡수율 및 치수정밀도 확인 (폭:0.5mm, 두께:2.0mm) - 바탕의 보수결함 및 청소완료(골조마감상태 및 치수, 청소상태) - 마감먹줄검사 및 허용오차는 2mm이내인가 - 앵커등의 철물은 황동이나 스테인레스 제품사용 - 앵커설치의 위치, 간격은 확인하였나 - 석재의 색조 명암 무늬를 맞추었나 - 석재와 실링재의 적부 검토 - 석재뒷면의 몰탈채움 상태점검 - 줄눈의 접합부분 상태와 수평수직의 유지여부 - 외부의 습식고정시 백화현상에 대한 대비는 하였는가 - 쇠고리를 붙일경우 방청처리는 하였나 - 돌붙임개소 주변의 배관용접 도장등의 작업은 완료되었나 - 석축공사시 20M이내마다 신축줄눈을 설치하였나 - 석축 물구멍은 3M당 1개소 기준으로 설치하였나 - 타일의 종류별 흡수율은 적정한가 - 현장실측에 의한 타일나누기를 하였나 - 시공중 기온은 5℃이상이며 한냉시 보양대책은 수립하였나 - 붙임면이 넓을시 세로3M, 가로4M정도 간격으로 신축줄눈을 배치하였나 - 붙임몰탈의 바르는 면적은 2㎡ 이하이며 발라 두는 시간은 20분 이내인가 - 타일의 들뜸을 검사용 망치로 검사하였나 - 타일의 접착강도는 4KG/㎠이상인가 - 바닥타일 시공후 물빠짐 구배는 양호한가 - 줄눈몰탈의 충진은 타일붙인후 24시간 경과후 실시하고 있는가 - 타일붙인후 3-4 시간내에 청소는 완료 하였는가 - 직사광선이 비치는곳의 보양은 하였는가

구 분	확 인 내 용	비 고
공통사항 액체방수 SHEET방수 도막방수 씰링공사 공통사항	- 방수재의 종류 및 규격, 품질보증서는 확인 하였는가 - 바탕의 불량개소 및 요철부 등은 보수 하였는가 - 바탕에 부착된 레이턴스 먼지 찌꺼기 유류는 제거하고 청소하였는가 - 물흘림 경사는 최소 1/200이상 유지하고 배수로 쪽으로 유도하였나 - 바탕의 건조도는 양호한가 - 밀폐부분 시공시 환기 및 조명설비는 점검했나 - 강우나 동결의 우려시 시공하지 않는가 (2℃이하에는 공사중지) - 방수원액의 희석 및 도포는 제품의 재료사용 기준에 적합한가 - 방수몰탈의 배합비(방수제:시멘트:물:모래= 1:2:5:9)와 두께(벽6～9mm 바닥10～15mm)는 적정한가 - 보호몰탈의 배합비(1:3)와 두께(벽18mm 바닥 24mm)는 적정한가 - 프라이머의 도포량은 적정하며 균일하게 도포 되었는가 - 접착방향은 물구배와 직각으로 아래에서 위로 시공하였나 - 겹침폭은 100MM이상인가 - 접착후 롤러로 압착하여 기포,주름이 생기지 않았는가 - 프라이머의 도포량은 적정하며 균일하게 도포 되었는가 - 도막제는 고르게 적정 두께로 도포하였나 - 드레인 모서리 관통파이프 주위는 보강하였나 - 씰링재 종류는 적절한가(피착면 종류 및 상태) - 피착면의 건조상태, 청소상태 및 결함보수는 확인하였는가 - 충진재는 적정크기를 사용하고 있나 (줄눈폭보다 3～5MM크게) - 마스킹테이프를 사용하고 있는가 - 이액형의 경우 얼룩이나 기포가 없도록 충분히 혼합하였나(15～20분) - 방수시험은 실시하고 있는가 (5CM담수후 24시간 누수검사)

【방수공사】

【창호공사,유리공사,도장공사】

구 분	확 인 내 용	비 고
창호공사 유리공사 도장공사	- 부재가공 및 조립상태는 양호한가 - 함수율 시험은 확인(15%±3%)하였나 - 문이나 문틀에 옹이나 파손된 부분이 없는가 - 문틀과 창호의 틈은 적절한가 - 문틀 둘레의 충진은 밀실한가 - 문틀주위의 코킹은 미려하게 시공되었나 - 설치후 개폐상태는 양호한가 - 창호설치후 파손이나 오염방지를 위한 보양 조치를 취하였나 - 부재가공 및 조립상태는 양호한가 - 개구부의 크기와 고정용앵커의 위치는 적절한가 - 철골 설치시 철골의 비틀림이나 휨은 수정되고 녹막이 칠이 되었는가 - 문틀과 창호의 틈은 적절한가 - AL창호의 창틀연귀부는 SEALING 하였는가 - 문틀 둘레의 충진은 밀실한가 - 문틀주위의 코킹은 미려하게 시공되었나 - 설치후 개폐상태는 양호한가 - 창호설치후 파손이나 오염방지를 위한 보양 조치를 취하였나 - 유리은 면이 고르고 변형 얼룩 기포등이 없나 - 유리와 창호 홈과의 여유치는 적절한가 - 유리끼우는 홈의 청소상태 확인 - 코킹은 미려하게 시공되었나 - 유리설치후 보양보호는 적절한가 - 가연성 도료는 적정하게 보관되고 있나(화재) - 바탕의 오염 부착물 유류 녹등은 제거하였는가 - 작업장의 조명 및 환기는 적정한가 - 콘크리트, 몰탈은 충분히 건조하였나 - 목부의 바탕은 옹이 송진등의 처리를 하였나 - 퍼티바름은 적정한가 - 보드류의 고정철물은 방청처리 하였는가 - 도료의 도막은 부풀음 터짐 박리 얼룩 등이 없는가 - 시공후 적절한 보양조치를 취하였는가	목재창호 강제창호

【천정공사,바닥공사】

구 분	확 인 내 용	비 고
천정공사 바닥공사	- 재료의 재질 규격 치수는 적절한가 - 재료의 아연도금 상태는 양호한가 - 천정내의 설비 배관공사는 완료하고 수압테스트 를 종료하였나 - 천정내 방화구획 관통부의 처리는 완료되었나 - 달대볼트의 간격은 적절한가(벽주변150MM 중간부위 900MM정도) - 각종 CHANNEL 및 BAR류는 적정간격으로 시공 되었나 - 용접부위의 녹막이 처리는 되었는가 - 등기구주위 보강은 되었는가 - 재료는 적정장소에 보관하고 있나(습기주의) - 붙임철물은 보드류의 두께보다 1CM이상 길고 아연도금 되었는가 - 붙임철물의 머리와 보드류의 면은 평활한가 - 붙임철물 간격은 단부15CM, 중앙부20CM이내인가 - 이중붙이기의 상하 이음매가 겹치지 않았나 - 붙임면의 요철 단차가 없고, 천정몰딩 코너의 마감상태는 양호한가 - 바닥구체의 흠집,청소상태,건조상태는 적절한가 - 조각이 나지않도록 시공도는 적절히 작성되었나 - 훼손 및 흠집이 있는 재료를 사용하지 않나 - 프라이머는 도포하였나 - 접착물량은 없는가(저온시 가열) - 무늬 및 색상맞춤은 적당한가 - 이음부분 처리는 양호한가 - 벽, 걸레받이부의 처리는 양호한가 - 시공후 오염이나 파손되지 않도록 보양하였나	천정틀공사 천정재 붙임

구 분	확 인 내 용	비 고
커튼월공사 홈통공사 금속공사 카페트공사 셔터설치공사 포장공사	- 커튼월의 요구성능을 확인하고 대형건물의 경우 종합 실물크기 성능시험을 실시했나 ․내풍압성능 : 설계 최대풍압력의 1/2 ․층간변위추종성 : 설계 최대변위량까지 ․수밀 및 기밀성능 : 4L/㎡․min의 살수 - 커튼월 설치용 먹매김은 검토했는가 - 커튼월의 설치시 시공정밀도를 확인하였나 : 줄눈의 폭, 중심일직선 여부, 양쪽단차 등 - 이종금속, 이질개료간의 접촉부분은 절연시켰나 - 커튼월과 관련된 공사와의 연결부 마무리는 적절한가 - 커튼월 설치후 오염 및 파손으로부터 보양하고 있나 - 선홈통의 상부 드레인에는 걸음막을 설치하였나 - 선홈통의 고정철물은 적정간격(2M이내)인가 - PVC연결부의 소켓류는 본드를 바르고 있나 - 제품의 표면이 손상된 곳은 없는가 - 매설부위(콘크리트, 몰탈)와 습기가 있는곳의 방청처리는 되었는가 - 공작 제작철물은 SLAG등의 불순물 제거후 녹막이칠을 하였는가 - 금속판이 습기가 많은 장소 및 옥상하부에 시공 될때에는 결로하지 않도록 조치하였나(단열등) - 다닥은 평탄하고 건조되었나 - 무늬 및 색상맞춤은 적정한가 - 바닥용 콘센트와의 아무림은 적정한가 - 가이드레일의 고정철물(앵커)은 적정한가 - 가이드레일의 수직도는 정확한가 - 가이드레일과 슬랫단부의 겹침은 적정한가 - 노면의 구배는 적정한가 - 다짐상태는 양호한가 - 노면과 접속되는 맨홀, L형측구와의 노면평탄성 JOINT처리는 양호한가 - 콘크리트 포장의 신축줄눈처리는 적정한가

【기타공사】