기술부대조건 (토공사)

1. 본 기술부대조건에 명시되지 아니한 사항은 "갑"의 설계도면, 시방서, 수량산출서 및 정부제정 각종 표준시방서에 따른다.

2. 안    전

(1) "을"은 "갑"이 승인한 안전관리자에 의하여 안전관리를 철저히 해야하며 안전과 관련된 "갑"의 요청사항은 최우선적으로 해결해야 한다.

(2) "을"은 공사수행에 투입되는 모든 작업인원(중기원 포함)은 필히 안전모 및 안전 보호구를 착용하여야 하며, 미착용 인원에 대해서는 "갑"이 일방적으로 현장 철수를 명할 수 있으며 "을"은 이에 응해야 한다.

(3) "을"은 공사장내와 운반로 및 사토장에 교통신호수 및 차량유도인원을 필히 배치하여야 하며, 필요시 안전시설물을 설치하여야 한다.

(4) "을"의 작업에 투입되는 모든 차량 및 중장비는  차량종합보험 및 중기보험에 가입된 차량이어야 하며, 미가입으로 인한 사고발생시 "을"이 책임진다.

(5) "을"은 공사 구역내에서의 수해방지대책을 세워 철저히 이행하고 동 사항의 미비로 수해 발생시 "을"의 책임과 비용으로 처리하여야 한다.

(6) "을"의 안전관리 소홀시 "갑"은 공사중지를 명할 수 있다.

3. 품    질

(1) 모든 공사는 품질관리를 철저히 해야 하며, 양질의 공사를 시행해야 하고 발주처 및 "갑"의 품질점검에 지적된 사항은 "을"의 부담으로 즉시 조치하여야 한다.

(2) "을"은 각종 공사규정에 따른 품질시공을 해야 하며, "갑"이 시험과 관련하여 협조요청시 적극 협조해야 한다.

(3) "을"이 불완전한 시공을 하거나 기타 사정으로 인하여 시공을 소홀히할 경우 "갑"은 공사의 일부 또는 전부를 중단 및 재시공시킬 수 있으며, 이로 인한 공기의 연장은 인정치 않는다.

(4) "을"은 기 시공된 공종에 대하여 최종준공정산시까지 유지, 보수하여야한다.

4. 환    경

(1) "을"은 환경 관련 제법규에 위배됨이 없이 공사를 수행하여야 하며, "을"의 법규 위반으로 인한 모든 책임은 "을"이 져야 한다.

(2) 사토용 운반차량은 필히 적재함 덮개를 사용하여야 하며, "을"은 사토장 정지에 유의하여 우기시 법면유실 및 토사유출 등이 발생되지 않도록 하고 사전수방시설을 철저히 하여야 한다.

(3) "을"은 공사장, 사토장 및 진입도로, 운반도로 등의 공사수행에 관련된 모든 장소를 항상 청결하게 유지하여야 하고 작업후 주변 청소를 철저히 해야한다.

5. 장    비

(1) "을"은 장비투입 5일전에 투입예정인 장비의 제원, 용도, 카다로그등을 첨부하여 "갑"의 승인을 득한후 장비를 반입하여야 하며, 승인없이 반입된 장비에 대해서 "갑"이 철수지시를 명할수 있고 이때 "을"은 지체없이 철수하여야한다.

(2) "을"은 시공중이라도 시공상 문제로 인하여 "갑"의 장비 교체 요구시 즉시 장비를 교체하여야 한다.

6. 연관 공종과의 협조

(1) "을"은 본 공사와 관련하여 시행되는 타공종업체와 협조를 하여야 한다.

(2) 공기지연 및 시공상 문제로 인해 타공종 및 후속공종에 지장 및 손실을 초래할 경우 손실금 전액을 "을"이 보상하여야 한다.

(3) 연관공사와의 문제발생시 "을"은 "갑"의 조정 내용에 따라야 한다.

7. 공 기 지 연

"을"은 공기를 필히 준수하여야 하고 "을"의 사유로 공기가 지연될 시 "갑"은 공정 만회를 위하여 별도의 조치를 취할 수 있으며, "을"은 이의를 제기할 수 없다.

8. 금액변경 및 정산

(1) 설계변경으로 인한 "갑"의 도급단가 변경 시 당초 "갑"의 도급단가와 "을"과의 계약단가 비율에  "갑"의 변경 도급단가를 곱하여 조정함을 원칙으로 한다.

(2) 신규공종 발생시는 "갑"의 신규공종 도급단가에 "갑"과 "을"의 전체 낙찰율을 곱한 단가를 초과하지 않는 범위내에서 조정하여 적용한다.

(3) 수량의 정산은 "갑"이 발주처로부터 인정받은 수량을 기준으로 하며, 실시공 물량이 설계물량을 초과하여도 이의를 제기할 수 없다. 단, "갑"의 귀책 사유로 인한 경우는 예외로 한다.

9. 검측 및 측량, 시험시공

(1) "을"은 시공전후 "갑"의 검측요구가 있을시 이에 응해야 하며 검측에 필요한 기구 및 인원을 갖추어야 한다.

(2) "을"은 측량팀을 현장에 상주시켜 본 공사와 관련된 측량업무를 신속히 처리하여야 하며, "갑"의 측량관련 자료요청시 즉시 자료를 제출해야 한다.

(3) "을"은 "갑"의 시험시공 요청이 있을 시 시험시공을 실시하여야 하고 이에 소요되는 비용은 단가에 포함된 것으로 한다.

(4) "을"의 측량 실수로 인한 민원 및 모든 손실은 전적으로 "을"의 책임이다.

10. 기술 특기 사항

※ 해당 공종의 발주처명시 제시방서, 도면 및 특기조건에 규정된 항목중 필요 사항 발췌하여 제시.