시공계획서 (낙하물방지망)

<추락방지계획>

제출서류 및 내용	세부내용 및 작성상의 유의사항
고소작업 또는 추락위험 장소의 안전방호시설물 설치계획	□ 각각의 추락 위험 장소에 대한 안전작업 방법 또는 안전시설물 설치 상세도 등을 작성 ㅇ 현장별 고소작업 부위 또는 개구부 등 추락위험 장소 및 위치를 정확하게 파악 ㅇ 개구부의 방호조치 방법을 상세하게 평면도, 종․횡단면도등 도면상에 표기 - 위치별로 덮개․안전난간․방호울 등 안전시설설치 계획을 명확하게 작성 ㆍ바닥개구부 : P/D, A/D, A/V, P/S, 장비반입구 등 ㆍ벽면개구부 : 슬라브 단부, 계단실 측면단부, 굴착선단부, ELV.PIT 등 ※ APT와 같이 평형별, 층별 동일한 개구부가 많은 경우에는 평형별, 층별 1개소의 안전시설 모델을 작성한다. ㅇ ELEV.PIT 내부 작업발판 설치방법 및 내부 추락방지망 설치 방법 등을 구체적으로 작성 - 작업발판 설치 상세도 (평면도, 종․횡단면도상에 표기) - 내부 추락방지망을 벽체에 연결하는 방법, 그물코 크기 등 상세계획 작성 ㅇ 각층의 리프트 탑승 부위에는 출입문 설치 및 시건 방법 등을 작성 ㅇ 박공(경사)지붕에서의 작업시 추락방호조치 (작업발판, 안전난간, 안전망, 안전대 걸이시설 등) 계획을 상세하게 작성 (평면도, 단면도상에 표기) ㅇ 비계, 추락방지망, B/T 비계, 달비계, 달대비계, 작업발판 등의 설치 및 사용계획 - 비계는 입면, 평면상에 설치 계획을 작성하고 안전망의 성능, 구조물과 안전망의 틈새 방호조치, 작업발판 설치계획 등을 자세하게 기록 - 비계 계획 : 비계 침하방지조치, 비계기둥․띠장․장선재․가새등의 설치간격 및 구조체와의 연결철물 설치 간격 등 구체적으로 작성 - 추락방지망 계획 : 망의 성능과 설치높이, 설치방법 등 입면, 평면상에 기록 - B/T 비계계획 : 승․하강 사다리, 안전난간, 발판고정, 이동식 B/T 비계인 경우 바퀴구름방지장치등 안전시설 설치계획을 작성

제출서류 및 내용	세부내용 및 작성상의 유의사항
	- 달비계 계획 : Rope 의 결속방법, 별도의 구명 Rope 설치 계획 등을 작성 - 달대비계 계획 : Cage의 제작, 설치․사용방법에 대한 계획을 작성 - 작업발판 계획 : 발판의 재질, 설치방법, 설치간격, 발판고정, 안전난간설치, 작업발판을 이용하는 작업공종 등 상세히 작성 ㅇ 가설 경사로, 가설 통로 등 안전통로 설치계획 작성 - 설치위치, 안전난간 및 미끄럼방지시설 등 안전시설을 자세하게 작성 ㅇ 이동식사다리 설치 및 사용계획 작성 - 작업공종, 전도방지조치, 설치각도등명기 ㅇ 철골작업시 수직 및 수평통로 설치 계획 - 승강용 트랩, 수직이동용 안전대 부착설비 설치 - 로우프 등 수평이동용 안전대 부착설비 설치 - 안전대 부착설비에 안전대를 걸고 이동 ㅇ 철골작업시 작업발판 설치계획 - 보와 기둥접합부 작업시 달비계등 설치계획 - 기둥용접 작업시 작업발판 설치계획 (불꽃비산방지막, 방풍막 등 설치계획 포함) ㅇ 교량공사시 기초 및 교각 안전시설계획 - 교각(Pier)ㆍCoping 거푸집 작업발판 - 가설통로, 승강통로, 추락방지망 설치계획등 - Coping상부 단부 추락방지시설 등 ㅇ 교량공사시 상부공 작업안전시설 계획 - 상부공 관련 상세도면 제출 - 가설통로, 작업발판, PC Girder 및 Steel Box 하부 안전망 - Steel Box 상부 안전시설 - PC 인장작업대 및 추락방지시설 - Slab Con'c 단부 안전시설 - Slab Con'c 단부 난간정리용 Cage 및 Cantilever Bracket 및 Steel Box Bracket 해체용 Cage - 고소작업대 ㅇ 수상작업시 작업안전대책 - 작업방법 및 순서포함 - 추락방지시설 계획 - 구명조끼등 안전장구 지급계획등 ㅇ 기타 추락위험 장소에 대한 방호계획

■ 작성절차

Step 1.  공정표상의 세부공종분류 및 확인

○ 굴착 및 흙막이공사, 가설공사, 철근 콘크리트공사, 철골공사, 유리공사, 도장공사 등 세부공종 공사단계 및 작업내용 확인

Step 2.  유해ㆍ위험요인분석(철근콘크리트 공사를 예를 들어 설명)

○ 철근콘크리트 공사시의 위험성, 재해보고서등을 참조하여 작업별 발생가능한 추락재해 위험요인 도출

- 고소에서 거푸집 조립ㆍ해체작업중 추락위험

- 고소에서 철근 조립작업중 추락위험

- 기타 추락위험

ㆍ안전난간 미설치로 인한 슬라브 끝단에서의 추락위험

ㆍ안전난간 미설치로 인한 계단실 측면 개구부에서의 추락위험

ㆍ안전난간 및 추락방지망 미설치로 인한 ELV.PIT 개구부 추락위험

․안전난간, 덮개 등 안전시설 미설치로 인한 P/D, A/D 등 바닥개구부에서의 추락위험

ㆍ안전문등 안전시설 미설치로 인한 각층의 건설용 리프트 탑승부위 개구부에서의 추락위험

ㆍ경사지붕에서의 작업시 안전난간 미설치로 인한 추락위험

Step 3.  방호방법 선정(ELV.PIT 개구부를 예로들어 설명)

○ ELV PIT 개구부 방호계획

Step 4.  지속적인 검토 및 수정보완

○ 설계변경, 공법변경, 작업방법 변경등 작업조건의 변경에 따른 지속적인 검토 및 수정 보완

■ 추락방지계획 사례

No1. ELV.PIT 개구부 방호계획

* 18층 APT 2개동, 20층 APT 2개동 신축현장을 예로들어 설명

위 치	ㅇ APT 각동 ELV.Hall의 ELV.PIT 개구부 - 1동 : 1개층 3개소×20층=60개소 - 2동 : 1개층 4개소×18층=72개소 - 3동 : 1개층 2개소×20층=40개소 - 4동 : 1개층 4개소×18층=72개소 총계 : 244개소
유해ㆍ위험요인	ㅇ ELV.PIT 개구부로 추락위험
안전대책	ㅇ ELV.PIT 벽면 개구부에 추락방지 표준안전난간 설치 (붙임1. 참조) - 상부난간대(H=90cm), 중간대(H=45cm) 설치 - 표준안전난간이 쉽게 파손되지 아니하도록 견고한 구조로 설치 - 안전난간 하부에 낙하물방지용 폭목(H=10cm)설치 - “접근금지”, “추락위험” 등 안전표지 부착 ㅇ ELV.PIT 내부에 작업발판 설치 (붙임2. 참조) - 적재하중, 작업하중등에 충분히 견딜 수 있는 견고한 구조의 작업발판 설치 ㅇ ELV.PIT 내부에 추락 및 낙하물 방지망 설치 - 높이 매 10m 이내마다 빈틈없이 추락 및 낙하물 방지망 설치 - ELV.PIT 내부에 비계조립, 전용철물등을 설치하여 견고하게 망 설치
안전시설 설치시기	ㅇ ELV.PIT 개구부 발생 즉시 (Con'c 타설 및 거푸집 제거후 즉시 안전시설 설치)
안전시설 존치기간	ㅇ ELV.PIT 벽면에 ELV 문 설치 및 내부에 ELV 설치작업 완료시 까지
안전시설 설치 수량	ㅇ ELV.PIT 벽면 개구부용 안전난간(기존제품) : 244개 ㅇ ELV.PIT 내부 작업발판(골조의 진행에 따라 발판을 이동시켜 작업하는 경우) - 1개동에 1개×4개동=총4개 ㅇ ELV.PIT 내부 추락 및 낙하물 방지망 - 1층바닥, 4층바닥, 7층바닥, 11층바닥, 15층바닥, 18층 바닥등 1개동에 6개×4개동=총24개
첨부 도면 및 서류	ㅇELV.PIT 벽면 안전난간 설치 상세도(입면도 등) ㅇELV.PIT 내부 작업발판 설치 상세도(평면도, 종․횡단면도상에 표기) ㅇELV.PIT 내부 추락 및 낙하물 방지망 설치 상세도(평면도, 단면도 등)
기타 주의사항	ㅇ안전시설 설치ㆍ해체작업시 안전대 부착설비 설치 및 안전대 착용 ㅇ작업상 부득이 안전시설을 임시로 해체할 때에는 작업종료후 즉시 재설치

※ 필요시 현장 여건에 맞는 안전가시설 설치도를 작성․첨부할 것

[붙임 1]

□ 엘리베이터 개구부 안전난간 설치 예시

○ 엘리베이터 개구부

- 안전난간을 기성제품을 사용 설치하거나 기존가설재(파이프)를 사용설치

- 안전난간의 높이는 상부 90cm, 중간 45cm

- 안전난간에는 수직망 설치(바닥에 밀착)

- 바닥에는 폭목 설치 및 안전표지판 부착

(설 치 도)

○ 엘리베이터 개구부 관리

- 기 설치된 안전난간의 이상유무 확인

- 엘리베이터 시공시 방호막 설치

- 안전난간을 타용도로 사용하는 행위 금지

- 안전난간에 자재를 기대어 적치하는 행위 금지

- 개구부 주변 작업시 안전대 착용

- 안전난간을 밟고 작업하는 행위금지

- 안전난간의 임의제거 금지(부득이 제거시 안전관리자 입회)

- 정리정돈 및 청결유지

- 엘리베이터 홀에서의 천장부 마감작업등에는 반드시 안전대 착용

(Con'c 타설시 천장에 앙카매입)

(안전작업도)

[붙임 2]

□ 엘리베이터 피트내부 작업발판 설치 예시

○ 조립식 브라켓 설치방법

- Con'c 구멍에 일직선이 되도록 브라켓 설치(총 6본)

- 브라켓에 클램프를 이용 강관 Pipe(2m)를 견고히 고정

- 설치된 브라켓과 강관 Pipe 위에 각재와 합판으로 제작된 발판을 설치 고정

- 발판에 자재 적재금지(작업후 정리정돈 철저)

- 합판과 각재는 변형 없는 견고한 것으로 사용

(설치도)

○ 피트 내부작업시 추락방지조치

- 별도의 안전대 부착설비설치

- 작업발판상에서의 작업시 반드시 안전대 착용(작업발판 설치, 해체 포함)

(안전작업도)

<낙하․비래 예방계획>

제출서류 및 내용	세부내용 및 작성상의 유의사항
낙하․비래 위험장소에 대한 방호시설 설치계획	□ 낙하․비래 위험 작업에 대한 장소별, 위치별 방호조치 계획을 상세하게 작성 ㅇ 상ㆍ하동시 작업금지 ㅇ 낙하ㆍ비래위험물 제거 - 비계상에 자재적재 금지 ㅇ 거푸집 조립ㆍ해체작업등 작업중 외부로 자재등이 낙하ㆍ비래되지 않도록 안전작업방법 수립 ㅇ 낙하물 방지망은 추락방지망 설치계획과 같은 방법으로 작성하되 맨 밑단에는 합판, 함석 등을 이용하여 방호선반 설치 ㅇ 낙하물방지망 설치높이, 설치각도, 방망의 돌출길이 명기 및 벽체와의 사이에 빈틈없이 설치등 상세히 작성 ㅇ 지상층 리프트 탑승장소 상부에는 방호선반등 낙하․비래 방지를 위한 시설설치계획 작성 ㅇ 건물 출입구 상부에는 방호선반(캐노피) 등 설치계획 작성 ㅇ 쓰레기 투하시설 또는 반출계획등 쓰레기처리 계획을 작성 ㅇ 투하시설 설치위치, 투하설비의 종류, 구조체와의 긴결, 하부 낙하물 방호시설등 포함 ㅇ 크레인(고정식 또는 이동식)작업시 낙하ㆍ비래 방호계획 - 작업반경내 관계자외 출입금지 - 중량물 달기작업 및 결속방법 준수 ․ 1점지지 금지, 2개소이상지지 ․ 후크에 해지장치 부착등 ․ 인양물이 요동하지 않도록 유도 로우프 설치 - 신호수배치 ․ 일정한 신호방법을 정하여 사용 ㅇ 기타 낙하․비래 위험장소에 대한 방호계획

■ 작성절차

Step 1.  공정표상의 세부공종분류 및 확인

○ 가설공사, 철근콘크리트공사 등 세부공종 공사단계 및 작업내용 확인

Step 2.  유해ㆍ위험요인분석(철근 콘크리트공사를 예를 들어 설명)

○ 철근 콘크리트 공사시의 위험성, 재해보고서등을 참조하여 작업별 발생 가능한 낙하ㆍ비래 재해 위험요인 도출

- 크레인등을 사용하여 철근, 단관파이프등 자재 인양작업중 낙하ㆍ비래 위험

- 고소에서 작업중 단관파이프, 각재등 낙하ㆍ비래 위험 등

Step 3.  방호방법 선정(자재 인양작업을 예로 들어 설명)

Step 4.  지속적인 검토 및 수정보완

○ 설계변경, 공법변경, 작업방법변경등 작업조건의 변경에 따른 지속적인 검토 및 수정보완

■ 낙하․비래 예방계획 사례

No1. 자재인양작업시 낙하ㆍ비래 예방 계획

* 18층 APT 2개동, 20층 APT 2개동 신축현장을 예를들어 설명

위 치	ㅇ 크레인(고정식 또는 이동식) 작업반경내, 구조물 외부
유해ㆍ위험요인	ㅇ 자재 인양작업시 낙하ㆍ비래 위험
안전대책	ㅇ 작업반경내 관계자외 출입금지 ㅇ 중량물 달기작업 및 결속방법 준수 - 1점 지지금지, 2개소이상지지 - 후크에 해지장치 부착등 - 인양물이 요동하지 않도록 유도 로우프 설치 ㅇ 신호수 배치 - 일정한 신호방법을 정하여 사용 ㅇ 낙하물 방호시설 설치 - 낙하물방지망 설치 (붙임1. 참조) ㆍ높이 10m이내마다 설치 ㆍ내민길이는 벽면으로부터 2m이상으로 할 것 ㆍ수평면과의 각도는 20°~ 30°유지 ㆍ벽체와의 사이에 빈틈없이 설치 ㆍ최하단에는 합판등을 이용하여 견고한 구조로 설치 - 낙하물 방호선반 설치 (붙임2. 참조) ㆍ구조물의 출입구 상부에는 합판등으로 방호선반(캐노피)등 설치
안전시설 설치시기	ㅇ 구조물의 골조가 높이 10m 초과시 낙하물 방호시설 설치 ㅇ 크레인을 이용하여 가재인양작업시 - 안전담당자, 신호수 배치 ㆍ작업반경내 관계자외 출입금지 확인 ㆍ중량물 달기작업 및 결속방법 준수 확인
안전시설 존치기간	ㅇ 골조가 높이 10m 초과시 낙하물 방호시설을 설치하여 낙하물 위험이 없을때까지(골조완료후 외부비계 해체작업시까지)존치 - 현장 여건에 따라 주 출입구 상부 낙하물 방호선반을 도장작업등 마감작업시 까지 존치
안전시설 설치 수량	ㅇ ELV.PIT 벽면 개구부용 안전난간(기존제품) : 244개 ㅇ ELV.PIT 내부 작업발판(골조의 진행에 따라 발판을 이동시켜 작업하는 경우) - 1개동에 1개×4개동=총4개 ㅇ ELV.PIT 내부 추락 및 낙하물 방지망 - 1층바닥, 4층바닥, 7층바닥, 11층바닥, 15층바닥, 18층 바닥등 1개동에 6개×4개동=총24개
첨부 도면 및 서류	ㅇELV.PIT 벽면 안전난간 설치 상세도(입면도 등) ㅇELV.PIT 내부 작업발판 설치 상세도(평면도, 종․횡단면도상에 표기) ㅇELV.PIT 내부 추락 및 낙하물 방지망 설치 상세도(평면도, 단면도 등)
기타 주의사항	ㅇ안전시설 설치ㆍ해체작업시 안전대 부착설비 설치 및 안전대 착용 ㅇ작업상 부득이 안전시설을 임시로 해체할 때에는 작업종료후 즉시 재설치

[붙임 1]

□ 낙하물 방지망 설치계획 예시

(설 치 도)

○ 옥탑 낙하물 방지망 설치계획 예시

- 옥탑 외부비계 설치

- 옥탑높이보다 1.2M이상 높게 설치(강관파이프 6m, 4m 사용)

- 최상단 표준안전난간 설치(90cm, 45cm)

- 낙하물방지망을 외부비계시와 동일하게 설치

- 낙하물방지망 설치가 곤란한 경우 비계상에 수직망 설치

(설 치 도)

○ 비계와 벽체사이 낙하물방지망 설치계획 예시

- 벽체와 비계사이를 원칙적으로 폐쇄

- 외부비계 사용 경우, 파이프를 한줄 추가 설치해서 벽체와 비계사이를  폐쇄

- 외부비계와 비계사이를 폭이 1m되는 망으로 설치

(낙하물 및 추락에 방호가능한 강도의 망을 사용)

- 외부비계를 사용하지 않을 경우 브라켓을 사용 추락, 낙하물 방지망 설치

(설 치 도)

[붙임 2]

□ 낙하물 방호선반 설치계획 예시

○ 건물 주출입구등 근로자 통행이 많은 곳에 설치

○ 인접한 건물사이 통로에 설치

○ 낙하의 위험이 있는 고정적인 현장 작업장소에 설치

○ 기타 낙하물방지망 설치가 곤란한 장소 및 도로 인접부분에 설치

○ 단관파이프 및 합판 등을 이용하여 설치

○ 캐노피 상부는 합판으로 설치

○ 캐노피 측면은 망을 설치

○ 미끄럼방지조치

○ 결속부위는 클램프등을 사용

(설 치 도)