지장물 철거

1.	일반사항

1.1	적용범위

이 시방서는 다음 사항에 관한 제반기준을 규정한다.

가.	지시된 구조물의 철거

나.	지시된 각종 관로(전력, 가스관, 급수관, 오․배수관, 전선관 등)의 절단, 제거,                캡핑

다.	지하탱크 및 파이프의 제거 및 속채움

라.	철거된 재료의 처분

마.	기존에 매립된 쓰레기 등의 처리

1.2	기성산출 기준

1.2.1	측정

콘크리트, 아스콘은 구조물의 체적(㎥), 석축은 전면의 면적(㎡), 파이프는 길이(m)로           산정한다.

1.2.2	지불

가.	1.2.1 항에 의거 산정된 수량에 계약단가를 곱하여 지불하며, 단가에는 철거작업              을 수행하기 위한 철거비용과 절단비용, 사토비용(잔토처리)을 포함한다. 단 흙쌓             기에 유용시는 사토비용을 흙쌓기 비용에서 산정한다.

나.	계약서에 다른 방법으로 언급되지 않았다면 철거공사에 따른 부대비용 즉, 지장물           사조사비용, 기존시설물의 보호 및 환경오염방지를 위한 비용, 인․허가비용, 우               발항의 처리비용 등은 각 공사의 계약단가에 포함된 것으로 하며, 직접지불의 대              상으로 하지 않는다.

1.3	제출물

다음 사항은 "10130 제출물"에 따라 제출한다.

1.3.1	지장물 조사보고서

수급인은 공사착수 7일 전에 철거되어야 할 지장물과 유해물질(생활쓰레기 포함) 및 공사구역 내에 매설되어 있는 각종 관로(가스관, 전력, 전선관, 급수관, 상․하수도관           등)의 종류, 규격,	모양, 위치, 매설심도, 구조 및 노후정도 등을 조사하여 그 보고서를       감독자에게 제출하여야 한다. 이때 가스관, 전력, 전선, 급수관 등은 손상을 입을 경우         대형사고를 유발할 수도 있으므로, 당해시설물 관리자로부터 시공도면을 입수하거나 인        근주민들의 설명을 듣고, 필요하다면 해당관리자의 입회하에 시굴을 실시하는 방법으로        정확한 내용을 조사하여야 한다.

1.3.2	시공계획서

가.	사용장비와 철거방법, 철거순서

나.	보존되어야 할 구조물 또는 각종 관로의 종류, 위치, 규격 및 보호방법

다.	대체시설이 필요한 지장물이 있을 경우 그 철거시기, 철거방법, 복구시기

라.	각종 관로의 적당한 절단시기와 캡핑방법

마.	먼지비산 방지를 위한 방진대책 및 작업의 안전을 위한 방호대책

바.	철거된 재료의 처리계획(처리장소, 처리방법, 처리업체 명시)

사.	기타 감독자가 필요하다고 인정하여 요구하는 사항

1.3.3	공사기록 서류

가.	공사에 지장이 없다고 판단하여 철거하지 않고 묻어버린 지하구조물이나 각종 관             로의 절단후 캡을 씌운 위치 등은 실제위치 및 매설심도 등을 도면에 정확히 기              록하여 공사 완료후 7일 이내에 감독자에게 제출하여야 한다.

나.	쓰레기나 일반폐기물, 특정폐기물, 유해물질 등을 처리한 후에는 처리물질의 종               류, 수량, 처리장소, 처리방법, 처리시기, 처리업체, 관련기관의 허가필증 등 증               빙서류를 작성하여 공사 완료후 7일 이내에 감독자에게 제출하여야 한다.

1.4	기존시설물의 보호

가.	수급인은 철거작업시, 기존의 다른 시설에 피해를 끼치는 일이 없도록 필요한 모             든	예방조치를 취해야 한다. 만약 수급인의 부주의한 작업으로 보호되어야 할 시              설물이 손상을 입었을 경우에는 감독자가 승인한 방법에 따라 수급인 부담으로 보            수하고 재설치 해야 한다.

나.	철거되어야 할 시설물 중에서 대체시설이 필요한 지장물은 대체시설이 완료될 때             까지 철거해서는 안된다. 이러한 목적을 달성하기 위하여 수급인에 의해 수행되는             모든 임시작업은 수급인 자신의 비용으로 처리되어야 한다.

1.5	환경오염 방지

가.	철거작업시, 소음, 진동, 충격, 분진 등으로 인근주민들에게 피해를 주는 일이 없            도록 환경관리에 만전을 기해야 하며, 먼지비산 방지를 위한 물의 사용은 그것이              얼거나 오염을 유발할 위험이 있을 경우, 사용을 허락하지 않는다.

나.	유해물질을 제거할 경우에는 적법한 절차에 따라 감독자의 승인을 얻어 처리하여             야 하며, 그 결과를 기록하여 증빙서류와 함께 감독자에게 제출해야 한다.

1.6	법적 요구사항

가.	환경오염 방지 및 폐기물 처리에 관한 법률을 준수하여야 한다.

(폐기물관리법 및 동법시행령, 대기환경보전법, 자원의절약과재활용촉진에관한법률)

나.	당국으로부터 공사시행에 필요한 신고 및 인허가를 득하여야 한다.

(일반 폐기물 다량배출자 신고 등)

다.	공사착수 전에 오․배수관, 가스관, 전력관, 전선관, 급수관 등의 관리자에게 이                설 또는	철거사실을 통지하고 그들의 요구사항을 수용하여야 한다.

라.	허락없이 소화전, 보도, 차도 등을 방해하거나 훼손하는 일이 없도록 하여야 한                 다.

1.7	시공전 협의

지장물 조사결과 이설, 방호, 철거의 필요가 있는 지장물은 그 관리자 또는 소유자와          공	법, 보안대책, 긴급시의 연락처 및 필요한 절차와 시공방법 등에 대하여 충분히 협         의한	후 공사에 임해야 하며, 가스, 수도관, 송유관 등에 접촉할 위험이 있을 경우는         만일에	대비하여 적당한 장소에 비상용 소화설비 및 역지밸브를 설치하는 등의 적절         한 대책을	세워야 한다.

1.8	문화재 등의 조치

공사중에 고적․사적 등의 문화재가 발견되었을 경우에는 그 상태를 변경함이 없이 즉          시 감독자 및 시․군․구청이나 문화재 관리국 등 관계기관에 연락하고 그 지시에 따라          야 한다.

2.	자재

(없음)

3.	시공

3.1	공사준비

가.	철거작업시 안전사고가 예상되는 부위는 임시방책이나 안전장치를 설치한다.

나.	철거되지 않고 보존되어야 할 기존 구조물은 깃발을 꽂거나 페인트를 칠하여 보호            한다.

다.	철거작업으로 기존구조물의 안전성이 우려되는 부위는 버팀대, 버팀목 등의 방호             조치를 강구한다.

라.	각종 관로의 매설부위는 위치를 알 수 있도록, 깃대를 꽂거나 횟가루 등을 뿌려               표시한다.

3.2	철거작업시 요구사항

가.	철거작업은 계획되어 있는 모든 새로운 작업에 장애물을 남기지 않고 주변구조물                에	피해가 가지 않는 방법으로 수행해야 한다.

나.	만약 주변구조물이 위험에 노출되었을 경우에는 즉시 작업을 중지하고 버팀대, 버            팀목 등의 응급조치를 취한 후, 그 시설의 관리자 또는 감독자에게 통지하여 지              시를 받아야 하며, 감독자의 지시가 있을 때까지는 작업을 재개하여서는 아니된다.

다.	철거작업은 공중이나 개인의 사생활을 침해하지 않는 방법으로 진행되어야 하며,             인근주민들의 출입이 가능하도록 항상 출구와 입구가 확보되어 있어야 한다.

라.	철거장비 등이 개인의 사유지를 침범할 경우에는 소유주로부터 사용동의서를 받아            야	한다.

마.	철거작업으로 발생된 웅덩이, 구멍, 도랑 등은 주변지반 높이까지 되메우기 한                후, 원지반과 동일한 밀도로 다져야 한다.

3.3	철거작업

3.3.1	관로(전력, 상․하수도, 가스관, 급수관 등)

철거하기로 확정된 각종 관로는 밸브폐쇄 등 안전조치를 취한 후, 적절한 위치에서 적정	한	방법으로 절단하고, 즉시 캡을 씌운 후 나머지 부분을 철거하여야 한다.

3.3.2	콘크리트 구조물

콘크리트 구조물은 발파하거나 부수어서 철거하여야 한다. 그러나 기존구조물의 일부         를	본공사에 이용할 시는 발파에 의한 철거는 허용치 않는다. 감독자가 공사 진행에          아무런	지장이 없다고 판단한 도로 또는 지표하에 있는 구조물의 콘크리트부는 철거         치 않아도	되나 건물, 옹벽 등의 기초하부 또는 최종마무리 노면에서 1m 이내에는          어떠한 경우	라도 구조물의 일부분이 잔존하여서는 안되며 깨끗이 철거되어야 한다.         또한 발파가 필	요할 시는 영향권 내의 신설구조물을 설치하기 전에 발파작업을 완료         하여야 한다.

3.3.3	지하구조물

계획고면 1m 깊이내에 있는 각종 지하구조물(지하갱, 저장실탱크, 지하실, 지하수조          및 분뇨탱크 등)은 제거하여야 하며, 철거한 곳은 깨끗이 정리하고 "40230 터파기 및         되메 우기"규정에 따라 주변의 자연토와 동일한 밀도가 되도록 다져야 한다.                  또한 공사에 지장이 없다고 판단하여 묻기로 한 지하탱크 등은 속을 비우고                  상기와 같이 흙을 채우며 다져야 한다.

3.3.4	기타

기존구조물 또는 포장, 보도경계석 등을 부분철거할 경우에는 수직․수평으로 조심스럽	게 절단하여야 하며, 기초 바닥슬래브는 자연배수가 가능하도록 철거되어야 한다. 보도	경계석, 측구, 포장, 석축 등은 신설구조물에 지장이 없다고 판단되지 않는 한 깨끗이           제거되어야 한다.

3.4	철거된 재료의 처분

3.4.1	재료의 명칭

가.	재화 : 철거된 재료중, 재화로서의 가치가 있는 모든 형상물은 발주자의 재산으로                    한다.

나.	폐기물 : 재화로 분류되지 않는 기타 재료는 폐기물로 분류하며, 이 폐기물은 수                       급인의 재산이다.

다.	재화 또는 폐기물의 분류는 감독자가 행하며, 모든 재료는 감독자의 허락없이 수             급인 임의대로 처분할 수 없다.

3.4.2	재화의 처리

가.	재화로서 분류된 재료는 감독자가 지시하는 장소에 적치해야 하며, 손상을 입지              않도록 충분한 주의를 기울여 제거되고, 분리되고, 운송되고, 보관되어야 한다.

나.	발주자의 재화로 특별히 지정된 품목이 제거 또는 보관되는 동안 해를 입었을 경             우에는 수급인의 비용으로 보수되고, 재설치 되어야 한다.

다.	재화는 발주자에 의해 적절한 방법으로 처리된다.

3.4.3	폐기물의 처리

폐기물은 설계도서에 명시된 방법으로 처리하되, 설계도서에 다른 방법으로 명시되지         않았다면 다음과 같이 처리한다.

가.	콘크리트, 벽돌조각

콘크리트 덩어리나 벽돌조각은 30㎝ 이하로 파쇄후, 건물 또는 구조물의 기초를 피            하여 "40220 정지작업"의 흙쌓기 조항에 따라 처리되고 다져져야 한다. 이때 매설            깊이는 마무리면에서 1m 이하로 한다.

나.	목재 등 기타 폐기물

1)	목재 등 이용가능한 재료는 이용자에게 무상양여하는 것을 원칙으로 하되, 무상              양여가 불가할 경우에는 쓰레기 매립장으로의 이송처리비용과 자체소각로를 설치              하여 소각하는 비용을 비교, 저렴한 방법으로 처리한다.

2)	소각이 불가능한 재료는 쓰레기 매립장으로 이송처리한다.

3)	콘크리트, 벽돌 등을 제외한 기타 폐기물은 현장에 파묻거나 소각로 없이 태우는	것을 허락하지 않는다.

다.	특정폐기물 : 특정폐기물 처리업체에 위탁처리한다.

3.5	기존에 매립된 쓰레기 등의 처리

사업지구 지하에 일반생활쓰레기, 건설폐재류, 공장폐기물 등이 묻혀 있는 경우에는 설         계 도서에 명시된 방법으로 처리한다. 단, 예기치 못했던 폐기물이 공사중에 발견된 경         우는 설계변경 승인을 얻어 다음과 같이 처리한다.

가.	쓰레기의 성분분석을 실시하여 일반 또는 특정폐기물로 분류한다.

나.	일반폐기물의 경우는 다음의 "안"중에서 공사비가 저렴하고 실행가능한 방법을 선             택 한다.

1)	쓰레기와 토사로 선별․분리가 가능할 경우, 토사는 흙쌓기 재료로 활용하고 쓰레	기는 장외반출 또는 위탁처리

2)	지구내 공원부지 등의 지하에 매립장을 설치하여 이송매립(지자체와 사전협의 필	요)

3)	전량을 장외반출 또는 위탁처리

다.	특정폐기물의 경우는 특정폐기물 처리업체에 전량 위탁처리한다.

3.6	폐기물 처리시 요구사항

가.	수급인은 폐기물 처리시, 승인받은 업체가 승인된 장소에서 적절한 방법으로 처리            하고 있는지를 철저히 확인하여야 하며, 이 시방서 1.3.3항에 의거, 그 결과를 기             록하여 증빙서류와 함께 감독자에게 제출해야 한다.

나.	특정폐기물의 처리는 반드시 소정의 면허를 가진 업체가 처리토록 해야 하며, 처             리업체의 소재지, 허가사업자명, 허가번호 등을 확인하고, 그 사본을 감독자에게              제출해야 한다.