첨 부 3

콘크리트 타설 계획서

1. 타설일시 : 1998. 4. 28  07:00 ～ 17:00

2. 타설물량 : 300 M3

3. 타설인원 : 반    장      1명

바이브레타    6명

믹서트럭받이  2명

슈트조정      2명

목    공      2명

인력면고르기  4명

보통인부      4명

계       19명

4. 소요장비 : B/P                             1대 (120 M3/HR)

믹서트럭                        8대

펌프카                          2대 (43 M)

DECK FINISHER (COMACO C-45)  1대

5. 수급계획검토 (con'c 물량 300 M3 기준)

: 타설 소요 시간 : 300 (M3) / 84 (M3/HR) / 0.8  = 5.1 HR 소요. (작업효율 80%)

: 시간당 타설 계획량 = 300 M3 / 5.1HR = 59 M3/HR

a. BATCHER PLANT 생산 능력

-. B/P 생산능력 : 120 (M3/HR) × 70% = 84 (M3/HR)  (B/P 효율 70%)

-. CYCLE TIME (운행시간) = 45 MIN

(적재시간(T1)=5분,  왕복시간(T2)=15분,  적하시간(T3)=15분, 대기 시간(T4)=10분)

-. 믹서 트럭 소요 대수

* 59 (M3/HR) × 45/60 HR = 44.25 (M3)

* 44.25 (M3) / 6 (M3/대) = 7.37 대

* 8대를 배치

b. PUMP CAR 능력 (SHEWING FU 41S)

-. 60 (M3/HR) × 0.8 (효율) × 2(대) = 80 (M3/HR)  충분

c. 작업 계획 시간

-. 07:00 ～ 12:30 (5시간 30분)

첨 부 4

측량 성과표

가. 단 면 도

450  3,000           3,600                   3,600             1,500

③                        ②    -2%                 ① level

800             5,275                        5,275              800

12.15

나. 측량 성과표

측점	포장 계획고	①번			②번			③번			비고 (편구배)
		계획	1차검측	최종검측	계획	1차검측	최종검측	계획	1차검측	최종검측

1차 검측자 : ○ ○ ○   (인)     최종 검측자 : ○ ○ ○  (인)