03130 나무마찰말뚝

제1항 일반

사항

1.1 적용범위

1.1.1 이 시방서는 요구된 표고에서 절단된 박은나무말뚝에 대한 시방을 제시한다.

1.1.2 관련시방서 :

1. 02222 땅파기 : 작업지면까지의 땅파기

2. 03110 말뚝재하시험 : 말뚝재하시험에 대한 요건

3. 04320 현장치기 콘크리트 : 콘크리트에 대한 요건

1.1.3 주요내용

1. 구멍뚫기

2. 말뚝박기

3. 공사기록

4. 불합격한 말뚝

1.2 참조규격

1.2.1 한국산업규격(KS) :

KS A9001 - 9003 품질시스템

1.3 자료

제출

1.3.1 자료제출요건 및 절차 : 01240 제출자료의 해당요건 참조

1.3.2 시공도면 : 말뚝설치순서의 상세와 기준을 명시하고 설계요건에 적합한 말뚝의 길이와 지름을 식별해야 한다.

1.3.3 제품자료 : 칼라, 선단, 접합 등의 상세를 제시해야 한다.

1.3.4 방부처리에 대한 확인서를 제출해야 한다.

1.4 이행요건

1.4.1 말뚝은 명시된 하중지지력이 도달될 때까지 박아야 한다.

제2항 기자재

2.1 재료

2.1.1 말뚝 : 생소나무로 껍질을 깨끗하게 벗기고 접합하지 않은 마찰형 말뚝

2.1.2 방부처리 : 지중 및 담수중의 말뚝에 대하여 크레오소트 압력주입으로 방부처리해야 한다.

2.1.3 치수 : 명시된 길이와 지름

2.1.4 접합은 허용되지 않지만 명시된 경우에는 감리자가 승인하는 방법으로 접합해야 한다.

2.1.5 말뚝선단 : 나무말뚝의 단부는 지지면에 완전하게 접촉되도록 성형하거나 용접된 강재를 부착해야 한다.

2.1.6 말뚝두부칼라 : 성형 또는 용접된 강재칼라

2.2 원산지 품질관리

2.2.1 01330 품질관리의 해당요건에 따라 나무말뚝의 공장시험 및 검사를 실시해야 한다.

2.2.2 견본시험은 감리자의 지시에 따라야 한다.

제3항 시공

3.1 시공조건확인

3.1.1 현장조건이 작업에 적합한지 확인해야 한다.

3.2 준비

3.2.1 사용할 해머의 종류는 사전승인을 받아야 한다.

3.2.2 인근구조물에 손상을 주지 않는 타격방법을 사용해야 한다.

3.2.3 작업을 착수하기 7일전에 인접한 토지의 소유주와 건물의 입주자에게 사전 통지를 해야 한다.

3.2.4 인근구조물이 손상을 입지 않도록 보호해야 한다.

3.2.5 말뚝은 땅파기한 표고에서 설치할 수 있도록 준비해야 한다.

3.3 구멍뚫기

3.3.1 명시된 방법으로 말뚝박기가 될 수 없는 경우에만 말뚝박기를 쉽게하기 위하여 구멍뚫기를 해야 한다. 구멍뚫기는 말뚝박기에 장애가 되는 지층에만 해야 한다.

3.3.2 구멍의 지름은 말뚝선단치수보다 25mm정도 더 작아야 한다.

3.4 말뚝박기

3.4.1 말뚝의 머리는 칼라를 사용해서 박기중 보호해야 하며, 해머타격이 균둥하게 분포되도록 말뚝절단면에 완전히 지지되게 해야 한다.

3.4.2 해머의 타격은 말뚝의 중심축에 전달되게 해야 한다.

3.4.3 말뚝박기가 지지층에 도달하기 전에 중단되는 경우에는 박기자료의 기록을 계속하기전에 추가로 300mm더 박아야 한다.

3.4.4 인접한 말뚝박기나 흙의 양력으로 솟아오른 말뚝은 다시 박아넣어야 한다.

3.4.5 말뚝박기중에 말뚝에 손상을 주어서는 아니된다.

3.4.6 말뚝의 머리는 명시된 표고에서 절단하고 말뚝캡 또는 접지빔을 시공할 수 있도록 말뚝머리를 다듬어야 한다.

3.4.7 방부처리된 말뚝에 표면손상이 가지 않도록 예방해야 한다.

3.4.8 절단된 말뚝의 노풀된 단부는 방부제를 발라야 한다.

3.5 허용오차

3.5.1 말뚝의 수직변동 : 길이에 대하여 1/50미만

3.5.2 경사말뚝의 각도 변동 : 1/25미만

3.5.3 절단표고의 변동 : 100mm미만

3.5.4 말뚝머리의 위치변동 : 50mm미만

3.6 현장품질관리

3.6.1 현장검사는 01330 품질관리의 해당요건에 따라 실시해야 한다.

3.6.2 재하시험은 03110 말뚝재하시험의 해당요건에 따라 실시해야 한다.

3.6.3 시험말뚝은 다른 말뚝에 대해 명시된 지름과 형식을 갖는 것이라야 하고, 같은 방법으로 설치해야 한다.

3.6.4 합격된 시험말뚝은 감리자의 승인을 받아 공사에 사용할 수 있다.

3.7 공사기록

3.7.1 01450 계약종료의 해당요건에 따라 해당자료를 제출해야 한다.

3.7.2 다음 사항은 정확하게 기록해야 한다.

1. 말뚝의 치수, 길이 및 위치

2. 말뚝박기의 순서

3. 말뚝의 전길이에 대한 m당 타격회수 및 마지막 10회 타격에 대한 박힌량

4. 구멍의 지름, 시점 및 선단 표고

5. 최종선단 및 두부의 표고

6. 1회 해머 타격의 추진력

7. 장비의 형식과 치수

8. 정열변동

3.8 불합격한 말뚝

3.8.1 불합격한 말뚝은 시험에 실패하거나, 위치를 벗어나거나, 절단표고에 못 미치거나, 손상을 입은 말뚝이다.

3.8.2 불합격한 말뚝은 추가말뚝을 제공하거나 명시된 요건을 합치하도록 대체해야 한다.