01210 계약관련사항

제 1 항 일반사항

1.1 범위

적용

1.1.1 이 시방서는 공사비내역서, 기성불신청, 설계변경절차, 하자에 대한 조치, 단가 계약의 검측 및 기성계산기준, 대안설계 등에 관한 요건을 제시한다.

1.1.2 관련시방서

1. 01120 관련법규등

1.1.3 주요내용

1. 공사비내역서

2. 기성불신청

3. 설계변경절차

4. 하자에 대한 조치

5. 내역계약의 검측 및 기성계산 기준

6. 대안설계

1.2 금액 내역서：계약체결시 제출하여 승인되고, 계약서에 첨부된 공사비 내역서

계약

1.3 기성불 신청

1.3.1 기성불 신청은 계약금액내역서와 같은 서식으로 요구된 부수로 작성하여 제출한다.

1.3.2 지급기간：계약에 지정된 기간

1.3.3 공사예정일정표：지급기간의 말일 현재로 갱신된 일정표

1.4 설계변경절차

1.4.1 감리자는 계약금액이나 계약기간의 조정을 포함하지 않는 사소한 변경을 지시할 수 있다.

1.4.2 감리자는 필요하다고 판단하는 경우 변경제안서를 시공자에게 요구할 수 있으며, 제안서에는 보완 또는 수정된 도면과 시방서를 갖춘 변경사항의 상세, 계약기간의 변경, 계약금액의 변경 등을 갖추어야 한다.

1.4.3 시공자는 필요하다고 판단하는 경우 감리자에게 제안하는 변경사항과 계약금액 및 계약기간에 대한 영향을 서술한 변경요청서를 제출하여 설계변경을 제안할 수 있다.

1.4.4 총액계약의 설계변경：변경제안서 기준

1.4.5 내역계약의 설계변경：계약단가기준, 계약금액과 계약기간의 변경은 시설공사 일반계약조건의 해당조항에 따른다.

1.4.6 설계변경작업지시：감리자는 제안된 설계변경에 대한 발주자의 승인을 받고, 시공자가 변경공사를 착수하도록 작업지시를 할 수 있다. 작업지시에는 변경사항과 계약금액 또는 계약기간의 변동을 결정하는 방법을 명시해야 하며, 변경공사는 즉시 착수되어야 한다.

1.4.7 설계변경지시서의 시행 : 감리자가 발급하는 설계변경지시서에는 계약당사자가 서명해야 한다.

1.5 하자에 대한 조치

1.5.1 명시된 요건에 합치하지 않는 공사의 전부 또는 일부분은 대처해야 한다.

1.5.2 감리자의 견해로 하자있는 공사를 제거․대체하는 것이 불가능한 경우는 감리자가 적절한 시정을 지시하거나 해당 부분의 기성금액을 조정하게 된다.

1.6 검측 및 기성계산기준내역계약

1.6.1 감리자는 기성계산을 위해서 시공자가 수행한 작업과 현장에 반입된 재료와 기기의 모든 수량을 검측 한다. 달리 명시된 경우가 아니면, 모든 수량은 계약도면에 명시된 치수를 사용해서 계산해야 하며, 명시된 허용오차에 대한 여유는 보지 아니한다.

1.6.2 내역계약으로 실시되는 공사의 수량검측은 개별시방서에 달리 명시된 경우가 아니면 다음에 따른다.

1. 무게에 의한 검측：무게로 대가를 지급하는 철근, 형강, 주강, 기타 금속재 및 이의 제작 등은 실제로 공급되어 사용된 재료의 종류와 수량에 대하여 저울을 사용하거나 제품자료에 게재된 무게로 검측 해야 한다.

2. 부피에 의한 검측：계약금액 내역서에 기재된 부피단위로 검측하며, 부피검측방법은 계약도면에 명시된 경우 또는 규정된 대로 설치되어 있거나 제거된 부피단위에 의한다.

3. 면적에 의한 검측：계약도면에 명시되었거나 규정된 면적단위로 검측하며, 면적검측방법은 규정된 것에 따른다.

4. 길이에 의한 검측：계약금액 내역서에 기재된 길이단위로 검측하며, 달리 명시된 경우가 아니면 검측할 부분 또는 공사는 설치되어 있는 품목의 중심선에서 측정한다.

5. 총액항목의 검측：총액항목은 계약금액 내역서에 기재되어 있거나 명시된 대로 전체 품목 또는 작업이나 구조물의 단위에 대하여 검측하며, 총액항목에 대한 부분 기성은 감리자가 승인하는 적절한 배분방법에 따라 결정한다.

1.6.3 시공자는 여기서 명시된 검측방법과 01310 시공측량의 해당요건에 따라 수량 검측에 필요한 모든 장비, 근로자 및 측량보조원을 배정해서 감리자의 검측을 지원해야 한다.

1.6.4 기성금액은 완성된 공사를 위한 공급 및 설치에 투입된 노무, 제품, 공구, 장비, 설비 및 임시시설물, 운반, 용역 그리고 부대품, 가설 또는 설치, 일반관리비 및 이윤에 대한 완전한 보상을 포함한다.

1.6.5 각 비용항목에 적용되는 단가는 공사금액 내역서의 단가를 적용한다.

1.7 대안설계

1.7.1 계약체결 후 승인된 대안설계는 설계변경절차를 거쳐 변경계약을 체결하게 된다.

1.7.2 관련공사와 조정하고 필요한 경우 인접한 공사를 수정해야 한다.

제 2 항 기자재：해당없음

제 3 항 시공：해당없음