01250 공사예정일정표

제 1 항 일반사항

1.1 범위

적용

1.1.1 이 시방서는 시공자의 공사예정일정표의 작성, 제출 및 갱신 등에 대한 절차적인 요건을 제시한다.

1.1.2 관련시방서

1. 01240 제출자료의 해당요건 참조

1.1.3

주요내용

1. 서식

2. 내용

3. 일정수정

4. 자료제출

1.2 서식

1.2.1 공사의 주요 활동을 각각 수평한 막대로 나타낸 막대도표로 일정을 나타내어야 하고, 매주 첫 작업 일에 확인해야 한다.

1.2.2 CPM기법을 활용한 네트워크 분석체계를 갖추어야 한다.

1.2.3 활동일람표의 순서：각 작업항목은 시작 시각의 순서에 따라 배열한다.

1.2.4 척도 및 간격：도표 표시와 수정을 위한 공간을 제공할 수 있도록 적절한 축척을 선택한다.

1.2.5 용지크기：최소 594㎜ ×841㎜

1.3 내용

1.3.1 각 요소작업의 시작 및 완료일자와 함께 공사의 완료순서를 나타내어야 한다.

1.3.2 시방서의 시방번호에 따라 각 항목을 확인해야 한다.

1.3.3 분리된 단계 그리고 다른 필연적으로 집합된 작업활동을 확인해야 한다.

1.3.4 작업의 각 단계에 관한 부분일정표를 제시해야 한다.

1.3.5 전체 일정의 한계공정을 구분하여 부분일정을 제시해야 한다.

1.3.6 일정에 회의 및 회합일자를 포함시켜야 한다.

1.3.7 매달 마지막날에 각 항목의 누가진척률과 완료된 작업의 전체진척률을 나타내어야 한다.

1.3.8 시공자는 제품을 보관하고 제품을 확인하는 것은 포함하여 가공도, 제품자료 및 견본품에 관한 제출일정을 제시해야 한다. 그리고 감리자가 제출자료를 검토할 시간이 필요한대로 최종 판정일자를 나타내어야 한다.

1.3.9 감리자가 제품과 제품의 보관을 확인할 수 있도록 반입날짜를 나타내어야 한다.

1.4 일정수정

1.4.1 제출날짜에 대한 각 활동의 진행과 각 활동의 예정된 완료일자를 나타내어야 한다.

1.4.2 사전제출, 공사범위의 주요변화 그리고 다른 변동사항으로 인하여 변경된 활동들을 확인해야 한다.

1.4.3 문제부분, 예상되는 지연 그리고 일정에의 영향을 명확히 하기 위해서 설명서를 제출해야 한다. 시공자의 변경된 일정의 결과를 포함하여 조치 및 그것의 결과를 보고해야 한다.

1.5 자료제출

1.5.1 분할계약의 각 시공자들의 작업을 조정하기 위하여 공사계약이 체결된 날로부터 20일 이내에 개략일정을 작성 제출해야 한다. 감리자가 검토 후 지시한 수정사항을 수용하여 변경한 자세한 일정은 7일 이내에 제출해야 한다.

1.5.2 매월 기성불 신청서와 함께 개정된 공사일정표는 제출해야 한다.

1.5.3 시공자가 필요한 만큼의 복사본 부수에 감리자가 보유하게 될 복사본 2부를 더하여 제출해야 한다.

1.6 배부

1.6.1 개정된 일정표의 복사본은 공사현장 사무소, 하도급시공자, 납품자 그리고 기타 관계자에게 배부해야 한다.

제 2 항 기자재：해당 없음

제 3 항 시공：해당 없음