01320 시공사진

제 1 항 사항

일반

1.1 적용범위

1.1.1 이 시방서는 기성불청구를 뒷받침하고, 기록문서를 보완하기 위한 일상적, 주기적인 시공사진에 대한 요건을 제시한다.

1.1.2 관련시방서

1. 01450 계약종료：공사기록문서

1.1.3 내용

주요

1. 사진촬영

2. 현상

3. 필름

4. 촬영방향

5. 사진제출

1.2 사진촬영

1.2.1 공사진행중 현장과 시공에 대한 사진을 감리자가 수락하는 상태로 촬영하여 제출해야 한다.

1.2.2 사진은 매회 기성불청구시 또는 매월 정기적으로 촬영해야 하며, 다음의 공사는 공사의 착수전, 진행중 및 완성 후에 사진을 촬영해야 한다.

1. 현장정리

2. 땅파기 또는 땅깍기

3. 기초공사

4. 구조물의 구체

5. 건물의 외벽

6. 최종준공

1.2.3 기존 공사조건에 대한 증거자료로 공사의 내부 및 외부에서 사진촬영을 해야한다.

1.3 현상

1.3.1 현상하는 사진의 색채, 현상지, 표면, 농도, 치수 등은 감리자의 승인을 받아야 하며, 현상된 사진은 사진철로 비치해야 한다.

1.3.2 각 현상된 사진에는 공사명 및 번호, 촬영위치 및 일자, 촬영자의 성명 등을 명기해야 한다.

1.4 필름：촬영된 필름은 공사기록문서와 함께 발주자에게 전달해야 하며, 시간적인 순서에 따라 목록을 작성해서 첨부해야 한다.

1.5 촬영방향

1.5.1 구조물이 완성될 때까지 지정된 시각에 그리고 4방향에서 고공촬영을 해야 한다.

1.5.2 준공일까지 지정된 시각에 4방향에서 보통촬영을 해야 한다.

1.5.3 촬영방향에 대하여 감리자와 협의해야 한다.

1.6 사진제출：현상된 사진은 01240 제출자료에 명시된 발송서한과 함께 촬영 후 3일내 또는 기성불신청서와 함께 제출해야 한다.

제 2 항 기자재：해당 없음

제 3 항 시공：해당 없음