01240 제출자료

제 1 항 일반사항

1.1 범위

적용

1.1.1 이 시방서는 자료제출 또는 승인을 얻기 위하여 시공자가 발주자 또는 감리자에게 제출할 자료의 작성과 발송에 대한 일반요건과 절차에 관한 시방을 제시한다. 제출자료에 관한 상세한 요건은 관련부분 시방서의 해당 항목에 기술되어 있다.

1.1.2 주요내용

1. 초기제출자료

2. 보완자료제출

3. 시공자에 의한 검토

4. 감리자에 의한 검토

5. 시공자의 책임

1.2  등

참조규격

1.2.1 건설기술관리법, 시행령 및 시행규칙

1.2.2 공사감리업무지침서(건교부, 1995)

1.2.3 한국산업규격

1.3 초기제출자료

1.3.1 필요한 제출자료들을 확인하고, 승인된 공사일정에 맞추어 각 제출자료의 제출일자를 결정해야 한다.

1.3.2 제출자료에는 다음 사항을 기재해야 한다.

1. 일자 및 개정일자

2. 계약명 및 계약번호

3. 시공자, 하도급시공자, 납품자, 제작자의 이름과 관련부분에 대하여 권한이 위임된 감리자의 서명 및 날인

4. 설명서, 모델번호, 형번호, 일련번호 또는 로트번호에 의한 제품의 식별

5. 계약도면 및 시방서에 의한 재료의 식별

1.3.3 처리난에는 감리자가 필요한 활동을 지시할 수 있는 충분한 공란을 두어야 한다.

1.3.4 제출자료는 미리 충분한 여유를 가지고 작성하여 관련작업이 시작되기 전에 감리자로부터 승인을 받도록 해야 한다.

1.3.5 감리자는 제출자료를 수령한 후, 각 제출자료의 검토에 10일(공휴일 제외)내의 여유시간을 가질 수 있다.

1.3.6 제출자료에는 감리자에게 제공되는 다음 사항을 포함한 복사본의 발송공문을 덧붙인다.

1. 시공자의 이름, 주소 및 전화번호

2. 제출부문서의 번호 및 발송일자

3. 계약명 및 번호

4. 납품자, 제작자, 하도급시공자의 이름, 주소 및 전화번호

5. 계약도면 및 시방서를 포함한 자료의 확인

1.3.7 감리자에게 제출된 제출자료의 원본과 마찬가지로 변경사항을 포함한 제출자료가 다시 제출되었더라도 승인받지 않은 한, 승인된 제출자료의 변경은 인정되지 않는다.

1.4 보완자료제출：정확한 절차에 따라 시공자가 작성한 보완자료는 검토에 필요한 충분한 자료를 포함해야 하며, 초기제출자료와 같은 요령으로 보완자료를 작성해야 한다.

1.5 시공자에 의한 검토：감리자에게 제출하기 전에 모든 제출자료는 시공자가 검토하고, 승인된 각 항목의 날인 및 서명을 확인해야 한다.

1.6 감리자에 의한 검토

1.6.1 제출자료는 공사의 요건에 합치되는지 검토해야 한다. 개별 항목의 검토는 그 항목이 속하는 전체에 대한 검토를 의미하지 않는다. 이러한 검토가 시공자에게 제출자료의 정확성, 계약문서의 요건에 대한 제출자료의 합치성, 명시된 제품과 유사제품 및 구조물의 잔여분과의 합치성 또는 계약문서에 합치하는 계약의 이행에 대한 시공자의 책임을 면제시켜 주는 것은 아니다.

1.6.2 날인, 처리한 표시, 서명과 일자가 쓰여졌는지를 점검해야 한다.

1.6.3 감리자는 계약문서에 따라 전반적인 합치성에 관하여 제출문서를 검토하며, 확인, 서명 및 일자를 기재한다. 제출자료의 1부는 시공자에게 돌려준다.

1.6.4 처리란 도장표시는 다음의 의미를 갖는다.

1. "승인" 표시는 허가를 나타내며, 모든 설명도 및 설명서가 계약문서의 개개 요건에 합치함을 나타내는 것을 의미한다. 즉 예시하여 설명된 제품의 가공, 조립, 제조, 설치를 진행할 수 있고 제출자료를 다시 제출할 필요는 없다.

2. "조건부 승인" 표시는 허가를 나타내며, 모든 설명도 및 설명서가 감리자의 교정을 거쳐 계약문서의 개개 요건을 합치함을 나타내는 것을 의미한다. 예시하여 설명된 제품의 가공, 조립, 제조 및 설치를 진행할 수 있다. 시공자는 감리자가 이의를 제기하지 않는 한 제출자료를 다시 제출할 필요가 없음을 의미한다. 조건부 승인에서 지적된 주요 시정사항은 기록을 위하여 30일 이내에 다시 제출해야 한다.

3. "승인불가" 표시는 불인정을 나타내며, 감리자가 적절한 노력으로 제출자료를 시정할 수 없을 정도로 제출자료가 불충분함을 의미한다. 제출자료는 개정이 필요하며, 수정을 해서 다시 제출해야 한다.

1.7 시공자의 책임

1.7.1 제출자료와 작업의 요건은 합치해야 한다. 특히 한 작업의 여러 제출자료는 그 작업의 다른 제출자료들 및 다른 작업의 제출자료들과 합치해야 한다는 것을 보증하는 것이 중요하다. 제출자료가 검토에 필요한 관련 자료들을 모두 갖추고 있음을 보증해야 한다.

1.7.2 감리자로부터 도면 및 관련계산자료를 승인 받는 것이 시공자가 도면 및 관련계산자료상의 오류에 대한 책임 또는 일반사항이 도면과 함께 감리자에게 제출되어 계약변경으로 승인 받기 전에는 계약문서의 일반사항에 대한 책임을 감면시켜주는 것이 아니다.

1.7.3 검토후 제출자료의 배부：감리자의 날인과 서명이 찍힌 승인된 제출자료는 시공자의 현장사무실 및 감리자의 현장사무실에 배부하고 관련 하도급시공자, 납품자 및 제작자에게도 배부한다. 그리고 시공자의 작업원중 관련자에게도 배부한다.

1.7.4 제출자료에 계약문서의 요건으로부터 위배되는 경우, 발주자에 대한 시공자의 책임은 발주자가 명확히 계약변경을 하여 승인하지 않는 한 발주자 또는 시공자의 검토 및 이탈사항을 포함하는 제출자료의 제출로 감면되지 않는다.

제 2 항 기자재：해당 없음

제 3 항 시공：해당 없음