현   장   설   명   서

본 현장설명서는 계약서의 일부가 됩니다.

1. 공   사   명

■ OO광고문화회관 건립 전기공사

2. 사업시행 목적

■ 21세기 광고계의 메카로서 무한 경쟁에 대처할수 있는 미래 지향적 광고문화회관 건립.

■ 광고인프라 구축 및 광고인의 문화복지 증진

3. 건립부지 : OO시 OO구 OO동 OO-OO번지

4. 공사 개요 : 지상OO층, 지하O층, 연면적 OOO,OOO.OO㎡

5. 공사기간 : 계약일 부터 20OO년 O월 O일까지(동절기 제외)

6. 현장 설명자 : OO광고문화회관 건설본부 건설사업팀장

7. 현장설명장소 : 건립 부지내

8. 현장설명 참가자격

■ 국가기술자격법에 의한 전기분야 산업기사 이상 또는 건설기술관리법의 전기분야 초급기술자 이상

: 국가기술자격수첩 또는 건설기술자 경력수첩 사본(원본 제시), 재직   증명서, 위임장과 도장(서명으로 대체 가능)을 지참

9. 설계서 열람장소 및 질의응답 : OO시 OO구 OO동 O-O OO타워 O층

OO광고문화회관 건설본부 건설사업팀 OOO

(Tele Phone : OOO-OOOO-OOOO / Fax:OOO-OOOO-OOOO)

■ 설계서에 대한 질의는 문서에 의함 (Fax 이용)

■ 공내역서 및 현장설명서

OO방송광고공사 홈페이지(www.OOO.co.kr)에 게재

※ 다운받는 방법

1. OO방송광고공사 홈페이지(www.OOO.co.kr)에 접속

2. 홈페이지에서 「public notice」클릭

3. 계약공고에서 공내역서 및 현장설명서 다운받음

10. 참고자료 : 필요시 관련도서는 다음과 같이 확보할 수 있음.

■ 기타 설계도서 : 담당자에게 개별신청하여 지정 출력소에서 신청인이

대금지급후 직접 수령

- 신청일 : 현장설명 후 2일 이내

- 담당자 : OOO (OO설계 대리 Tel : OOO-OOOO-OOOO)

- 출력소 : OO상사 (대표 : OOO Tel : OOO-OOOO-OOOO

주소 : OO시 OO구 OO동 O-O OO빌딩)

11. 현장설명후 도면, 시방서, 설계수량 등이 변경 있을시 입찰 7일전(8월22일)까지 당사 홈페이지(www.OOO.co.kr)에 공고할 예정이오니 필히 확인후 수정된 공내역으로 입찰에 참여할 것. 미확인에 의한 일체의 책임은 입찰자에 있음.

12. 현장설명시 제시된 설계도서, 현장설명서 등 기타 내용을 숙지하지 못하여 발생하는 사항에 대해서는 이의를 제기할 수 없다.

13. 기타 유의사항

■ 도서 및 서류에 관계된 항목

1) 본 공사는 한국광고문화회관 건립공사에 관한 설계도서 및 공사시방서에 의하여 시행한다.

2) 설계도서, 시방서 및 제반법규 사항 등이 서로 상이하거나 내용이

불분명하여 시방서에서 정한 규정을 적용하기 어려울 경우에는

책임감리자에게 제출하여, 승인을 받는다.

3) 시공상 필요한 각종 수속, 허가 등은 수급자가 발주처를 대행하여

필하고, 소요되는 비용은 내역서에 의거 수급자 부담이며, 내역서

이외에 추가 비용발생시 책임감리자에게 보고하여, 승인을 받은후

발주처에 청구할 수 있다.

4) 시공상 필요하거나 책임감리자가 요구하는 부위의 공작도, 시공도 및

SHOP DWG인원은 책임감리자에게 제출하여, 승인을 받는다.

5) 설계도서에서 제시하는 공사방법과 다른 방법으로 공사를 시행할

경우는 시공방법변경에 따른 공사비 증감 내역 및 공사전반에 미치는 영향을 책임감리자에게 보고하여, 승인을 받아 시공하여야 한다.

■ 시공에 관계된 항목

1) 견본으로 확인 할 수 있는 사용자재는 견본품을 작업착수 30일 전에 책임감리자에게 제출하여, 승인을 받아 시공한다.

2) 모든 자재는 KS 표시품 동등 이상품을 사용하고, KS 표시품이 없는 제품은 시중 최상급의 사양서나 견본을 제출하여 책임감리자에게 보고하여, 승인을 받은 후 사용하여야 한다.

3) 수급자는 공사 착공 후 30일 이내에 품질보증계획을 책임감리자에게 제출하여, 승인을 받아야 한다.

4) 수급자는 계약내용에 따라 착공하여야 하며, 계약 후 착공계 및 공정표(CPM)를 책임감리자에게 제출하여, 승인을 받아야 한다.

5) 수급자는 공사시작 전에 전체공사에 관한 시공계획보고서를작성하여 책임감리자 및 공사관계자에게 시공계획 보고회를 개최하여야 하며, 각 공종별로도 공사시작 30일전에 공종별 시공계획서를 제출하며, 책임감리자 및 공사관계자에게 시공계획보고회를 개최하여야 한다.

6) 기존시설은 최대한 훼손하지 않도록 하되 불가피한 경우에는

책임감리자에게 보고후, 승인을 받아야 하며, 공공시설물 손괴에

대하여는 수급자 부담으로 원상복구하여야 한다.

7) 공사장 안전관리 및 안전관리비는 관련법규에 의거 시행함.

8) 본 공사 시공 및 준공에 필요한 인․허가 등 대관청 및 유관기관에 대한 행정 수속 대행(시험, 검사 및 서류 작성 업무 등 포함)을 적시에 처리하여야 하고 이에 소요되는 비용은 수급자 부담으로 한다. 단, 전력인입을 위한 한전불입금은 발주처부담이며, 행정 수속은 수급자가 대행한다.

9) 사용전검사 및 요청검사비용은 발주처 부담이며, 행정수속은 수급자가 관계부처(한국전기안전공사)에서 원만히 진행될 수 있도록 일체의 사항을 대행한다. 단, 고장전류 계산(인입에서 부하 말단까지) 및 수배전반의 보호협조 계산을 수급자 부담으로 진행하며, 결과는 책임감리자의 승인을 득한후 수배전반 납품업체에 그 결과가 반영이 되도록 전달한다.

10) 수급자는 사용전 검사시부터 목적물을 책임감리자의 승인하에 운영주체에 인계시까지 안전관리자 선임를 수급자 부담으로 선임한다.

11) 수급자는 공사완료 후 목적물을 책임감리자의 승인하에 운영주체에   인계하고, 인계시에는 제반하자 및 행정절차 등 각종 계약조건을 충족시켜야 한다.

12) 수급자는 수전후 인수․인계시까지 시험운전시 사용한 전기요금을 건축 도급자와 협의하여 부담한다.

13) 공공시설 이용자의 안전에 유의하고 공공시설에 피해가 발생하지 않도록 안전조치 후 공사를 착공하여야 한다.

14) 수급자는 도로 등 기타 굴착 공사의 경우 사전 지하매설물(상하수도, 가스, 통신 등)유무를 확인하고 안전수칙에 따라 공사를 시행하여야 하며, 불이행으로 인하여 발생하는 민.형사상의 손해에 대한 책임을 진다.

15) 공사 시행중에 있어서 현장의 마무리, 협의에 의한 기구의 설치위치 및 설치공법 등의 경미한 변경은 현장여건에 맞도록 시공 또는 변경 도면을 작성하여 책임감리원에게 제출하여 승인을 득한후 시공하여하며, 이 경우의 공사비는 수급자 부담으로 한다.

16) 수급자는 설계변경 및 시공변경 등 공사내용을 정확히 기록하여 보수․유지관리가 편리하도록 준공도면을 작성하여 원도 각 1부(축소 원도 3부 포함) 및 청사진 각 3부(축소도면 3부 포함), CD 1매 및 공사 진행용 천연색사진집을 책임감리원의 승인을 받은후 제출하며, 작성방법에 대해서는 책임감리원의 지시에 따라 적성한다.

17) 수급자는 승강기설비에 전원을 공급하여야 하며, 승강기에서 요구하는 사항을 반영하여 수급자 부담으로 공사를 진행하여야 한다.

18) 수급자는 가설사무실을 설치하여야 하며, 가설사무실 부지 확보가 안될 경우 도급분 가설공사 금액으로 인근에 사무실을 임대하여 건축공사에 의한 사무실 부지 확보시까지 사용하여야 한다.

- 잠실지역 인근 사무실 임대료 : 평당 10만원(월기준, 추정 가격, 보증금 제외)

- 지하층 완료 후 사무실 부지 제공 가능

■ 관급자재에 관계되는 항목

1) 수급자는 일체의 관급자재의 보관, 현장시공 및 전반적인 관리에 책임이 있으며, 보관소홀, 현장 시공실수 등 전반적인 관리 잘못으로 인한 일체의 손실은 수급자의 부담임.

2) 수급자는 관급자재에 대한 내용을 사전에 숙지하여 공사진행을 주지 않도록 관급자재 납품업체의 요구사항에 협조하여 시공하여야 한다. 단, 상호간의 분쟁발생시에는 책임감리자에게 보고하여, 승인을 받은 후 시공하여야 한다.

■ 민원에 관계되는 항목

1) 수급자는 본 공사 시행과 관련하여 환경오염 등의 각종 민원이 야기되지 않도록 지역주민과 긴밀히 협조하는 등 최대한 예방조치를 취하여야 하며, 민원발생시에는 이를 신속히 처리하고 이와 관련된 비용은 수급자 부담으로 한다.

2) 수급자는 공사착수 전 공사장 인근 주변 건물에 대하여 추후 공사로 인한 피해 유․무를 판단할 수 있도록 현황사진 및 비디오 촬영 등으로 건물에 대한 사전 안전점검을 실시하고 이를 관리하여야 한다.

3) 당해 공사로 인하여 재해, 인접지 건물피해, 안전상의 문제등으로 민원이 발생한 경우 수급자 부담으로 이를 원상복구 또는 보상하여야 하며, 이로 인한 민.형사상의 책임은 수급자에 있다.

4) 공사중 발생하는 진동 및 소음으로 인하여 주변에서  민원이 제기되지 않도록 주의하여야 한다.

전 기 공 사 현 장 설 명 서

공사명 : OO광고문화회관 건립 전기공사

일  시 : 20OO년 O월  O일  OO : OO ～

장  소 : OO시 OO구 OO동 O-O

건립부지내

한 국 방 송 광 고 공 사

한국광고문화회관 건설본부